중점관리저수지 수질개선 시범사업 기본 및 실시설계

과 업  내 용 서

2013. 4.

	한국환경공단
	사업개발팀

Ⅰ			과업 개요

1. 용역 목적

□ 주민 접근성이 용이한 도시 인근의 저수지는 레저 및 친수공간 기능에 대한 주민요구가 증대

□ 중점관리저수지 지정․관리를 위한 법적근거 신설(’12, 환경부)

□ 저수지 수질개선을 위한 시범시설을 설치·운영, 현장적용성을 확인하고 중점관리저수지 수질관리 매뉴얼 제작을 위한 자료로 활용

2. 용역 개요

□ 용 역 명 : 중점관리저수지 수질개선 시범사업 기본 및 실시설계

□ 용역기간 : 착수일 ～ 2013. 7. 15

□ 용 역 비 : 45,744천원 (부가가치세 포함)

□ 대상지역 : 기흥저수지 (경기도 용인시 기흥구 소재)

□ 용역 주요내용

□ 현장 조사

- 기초자료 조사, 수질 및 유량조사, 측량 및 토질조사 등

□ 기본 및 실시설계

- 시범사업 대상지점, 시범시설 및 시범시설 용량 산정

- 공사발주를 위한 설계도서, 기타 사업수행에 따른 필요사항

□ 인․허가 수행

- 수질개선 시범시설 설치 관련 인․허가에 필요한 사항

Ⅱ			추진 방향

□ 대상지역 현황조사

□ 기흥저수지 수량, 수질, 수생태, 관련계획 등 기초자료 조사

□ 시범사업 대상지역의 수질, 유량, 측량, 토질 등 현장조사

□ 시범시설 설치지점 선정

□ 수질오염 저감효과가 크고, 시범시설 성능확인이 용이한 후보지역 선정 및 장단점 비교(하천․구거의 저수지 유입지점, 호내 오염이 심한 지점 등)

□ 시범시설 설치에 기술적인 문제점이 있는지 여부 검토

□ 시범시설 설치에 따른 민원, 토지매입 필요여부 등을 고려하여 시범사업에 문제가 없는 지점으로 검토

□ 기흥저수지 만수위 및 운영 중 자연재해(강수, 바람, 지진, 낙뢰 등)에 대한 검토

□ 사업추진에 지장이 발생하지 않도록 공사 시행시 필요한 인허가 사항 검토

□ 시범시설 선정

□ 대상부지 적용성을 고려한 후보시설 선정 및 장단점 비교

□ “환경기술 및 환경산업 지원법”에 의한 신기술인증 기술이 적용된 공법 우선 검토

□ 시범사업 일정을 고려, 설치․운영에 문제가 없는 시설을 검토

□ 시설성능이 양호하고, 유지관리의 편리성 등을 고려

□ 자료조사를 통하여 다양한 기술을 비교․분석하여 현장특성에 적합한 공법을 선정할 수 있도록 과학적 근거를 토대로 자료를 정리하여 제시

□ 공법을 선정할 경우 고려사항

- 자연형인 경우 침수에 의한 침식 가능성 검토

- 장치형인 경우 침수에 의한 기능저하 및 토사 유입가능성 검토

□ 시설시설 규모 결정

□ 관련법령, 지침 또는 편람 등의 설계기법을 기준으로 하되, 현장여건에 따라 용량을 결정

□ 설계기준, 설계지침 등에 대한 자료조사를 수행하고 과학적 근거를 토대로 한 자료를 정리하여 제시

□ 시범시설 종류, 시범시설 규모 등은 공사비(600백만원(부가세 포함))를 고려하여 선정

※ 제시된 시범사업의 설치지점, 시범시설 종류, 시범시설 규모를 종합하여 자문회의 등을 통하여 시범시설 결정

□ 시범시설 성능검토 및 유지관리

□ 선정된 시설별 성능(수질개선 효과) 검토 방법 제시

- 조사위치, 분석/측정항목, 적정 조사주기

- 실 소요 운영비용 검토

- 영향수역 설정 등

□ 시범시설별 운영 체크리스트 작성

□ 합리적인 연간 유지관리비 산정 등

Ⅲ			과업의 내용

1. 과업의 주요내용

(1) 기초조사

□ 기흥저수지 현황 조사

□ 기초현황 조사 및 상위계획 등 관련계획 검토

□ 사업대상지의 관련 인허가 검토

(2) 현장조사

□ 설치부지 조사 및 적정성 검토

□ 설치지역의 수질․유량, 지질 및 측량조사

□ 환경성검토의 필요성 검토

(3) 기본설계

□ 설치위치 선정 및 오염원 발생특성 조사

□ 시범시설 및 시범시설 용량 결정

□ 홍수량에 따른 시설의 영향 분석

□ 저감시설 처리효율의 예측

□ 모니터링 및 유지관리 계획수립

(4) 실시설계

□ 토공 및 기초․구조물 설계

□ 기계설비(기종 및 용량설정, 수문설비, 제어방식, 배관계획)

□ 전기설비(전기계통, 수변전설비, 운전 및 조작설계, 계측 및 제어설비 등)

□ 폐기물처리 계획 및 공사비 산정 등

2. 세부 과업내용

(1) 기초조사

□ 기초현황 조사

□ 기흥저수지 일반현황 조사

□ 기흥저수지 유입하천(구거), 수량, 수질, 수생태 등 자료 조사

□ 기흥저수지 수질개선 관련 각종 계획 등 조사

□ 인허가 사항 조사

□ 시범사업 대상지역에 대한 관련 인허가 사항 등을 검토

(2) 현장조사

□ 설치 후보지 조사

□ 후보지에 대한 현장조사를 실시하고 시범시설 설치가능성, 사업의 효과, 시범시설 설치의 용이성, 민원 등 특․장점을 검토

□ 설치 후보군을 비교․분석하여 최종 후보지 결정

□ 최종 후보지를 선정할 시에는 관련 인․허가사항을 반드시 검토하고 용역 수행 중에 인허가 절차를 추진

□ 최종 후보지의 수질 및 유량 조사

□ 조사방법

- 조사시기/횟수 : 평상시/1회

- 조사지점 : 시범시설 설치지점

※ 조사지점은 현장조사 후 발주처와 협의하여 결정

- 분석항목 : pH, 온도, DO, BOD5, CODcr, SS, T-N, T-P, Chl-a, 유량

□ 최종 후보지 수질특성 분석

□ 지질조사

□ 토질조사는 주요 시설물 설치위치에 실시하고, 분석항목은 시범시설 설계에 필요한 항목에 대하여 시행(사후 정산)

□ 과업의 내용

- 시범시설별 특성에 맞는 토질 설계인자 조사

- 주요 시설물 설치위치의 지층구조 조사를 위한 시추조사 등

□ 과업 수행지침

- 토질조사는 시범시설별 특성을 감안하여 시설물의 기초설계를 위한 지반조사와 토공설계에 필요한 사항을 조사하고 시험을 실시

- 토질조사 결과는 토질조사 지점을 표시한 도면과 각 지점별 지층 단면도 및 코아(보관용기 포함)를 제출

- 토지조사를 실시한 후 심도에 따라 지질 및 지질구조의 수직분포(퇴적층, 풍화토, 풍화암, 연암 등)가 나타날 수 있는 주상도를 작성

- 모든 토질시험은 국가가 공인하는 시험기관이나, 사설 시험소일 경우, 시험결과에 대한 책임있는 토질기술사의 확인을 득하여야 함

- 지질조사는 사업 예정부지에 대한 기초지질을 조사하여 구조물 기초 설계시 활용하기 위하여 시행하며, 조사범위 및 사용장비 계획 등을 포함한 세부 조사계획을 수립하여 발주처와 협의 후 시행

- 보링 깊이는 연암 1m까지 굴진하는 것을 원칙으로 하며 구조물의 기초지지력이 충분히 확보될 수 있도록 하여야 함

- 시추공 굴진이 완료되면 절리균열의 발달상태와 Core 회수율, 지하수위 등 제반사항을 상세히 기록한 보고서를 제출

- KS 및 관련시방 규정에 의거하여 시행하며, 조사 결과에 따라 정산하되 사업부지의 이용 현황(경작 등)으로 인해 시추작업이 불가능 할 경우에는 계약 쌍방간에 협의하여 결정

□ 측량조사

□ 측량조사는 공공측량 작업규정에 의하여 실시하고, 시범시설의 위치에 부합되게 측량구간 및 범위 등을 선정

□ 과업의 내용

- 현황측량

□ 과업수행 지침

- 측량관계법 및 공공측량 작업규정에 관한 기준에 의거 실시

- 측량수행 후 관측수부, 계산부, 성과부, 망도의 계산근거 및 측량원도 등의 성과물을 제출

- 공사 시행의 기본이 되는 기준점(TBM)을 설치

- 측량의 기준점은 국립지리원의 기준점과 성과표를 기준

- 토지수용에 따른 토지, 건물, 분묘, 보상물건과 기타제반 조사사항은 공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법과 토지수용법 규정에 의거 조사(필요시)

- 축적은 1/500으로 하며, 특히 지장물의 현황을 상세히 실측

- 지하매설의 하수관, 차집관로, 기존 상수도관, 가스관, 석유관, 통신, 오․폐수 횡배수관 등을 철저히 조사하여 현황도에 기재하고, 관계기관과 협의하여 위치 및 심도를 조사

□ 토지 및 시설물의 보상조서 작성(필요시)

□ 사업에 필요한 부지와 시설물에 대하여 보상물 조사를 실시하여 보상가액을 산정하고 보상용 지도 및 용지조서를 작성

□ 환경성 검토의 필요성 검토

□ 최종 후보지는 사전환경성검토의 필요성 여부를 검토하고, 필요시사전환경성 검토서(또는 환경성검토, 환경영향평가)를 작성

□ 환경성검토서 작성에 대한 댓가는 별도 계상(사전에 발주처와 협의)

(3) 기본설계

□ 시범시설의 설치위치 선정

□ 시범시설의 영향분석

□ 홍수량에 따른 시설의 영향 분석

□ 시범시설의 배수위 검토 등

- 유입구 또는 유출구의 수위조정을 위해 보를 설치할 경우 배수구역의 유출지체가 없도록 설계

- 처리시설의 수리계통도를 작성하여 유로의 흐름을 체크

□ 시범시설의 선정

□ 시범시설 후보군을 비교․분석하여 최종 시범시설을 결정

□ 최종 후보지의 수질특성 및 수질개선 기여도 등을 고려한 시설

□ 처리효율의 안정성이 기 증명되었거나, 증명될 수 있는 시설

□ 유지관리가 용이하고 관리비용이 저렴한 시설

□ 시범시설의 용량 결정

□ 관계법령, 관련지침 또는 편람 등의 설계기법을 기준으로 하되, 현장여건에 따라 적정한 용량을 결정

□ 시범시설 처리효율의 예측 및 효과적 설계

□ 시범시설의 처리효율을 예측하기 위한 방법을 제시

□ 체계적이고 논리 타당한 방법을 통한 처리효율 예측

□ 모니터링 계획수립

□ 수질 관련 모니터링 계획

□ 모니터링 장비의 적용가능성 검토

□ 모니터링 장비의 설치위치 및 장소 제시 등

□ 유지관리 계획수립

□ 시범시설별 운영방법 설정

- 시설의 운영매뉴얼을 작성하여 제시

□ 시범시설별 운영 체크리스트 작성

- 시범시설 운영시 점검 등을 위한 체크리스트를 작성

□ 합리적인 연간 유지관리비 산정 등

□ 기타 기본설계 주요내용

□ 시범시설의 공사비 등 경제성 검토

□ 시범시설 설치에 따른 수리설계 및 구조계산

□ 시범시설의 배치계획

- 시범시설의 형태, 지형 및 퇴적토사 등을 고려하여 배치

□ 단면설계

- 단위 시설에 대한 필요 단면과 각 설비간의 관계, 유지관리 및 유하량 등을 고려하여 설계

□ 구조물의 안정성

- 설계조건에 적합하면서 시범시설별 기능이 유지될 수 있는 경제적인 구조로 설계

□ 모니터링이 용이한 구조로 설계

- 유입량, 유출량, by-pass량의 측정이 가능한 구조

- 시설유입, 유출, by-pass시료 채취가 용이한 구조

- 자동화시설의 설치가 가능한 구조

- 다만, 현장의 특성을 고려하여 구조를 결정

※ 본 과업의 특성을 고려하여 명기하지 않은 사항이라도 필요시에는 기본설계에 포함

(4) 실시설계

□ 토목공사

□ 설계기준 : 관련 시방 및 규정에 준함

- 분명한 출처와 근거제시

□ 토공설계

- 시범시설 운영이 편리하고 양호한 기초지반을 확보 할 수 있도록 계획하되, 토공 이동량이 최소화 되도록 설계

- 사토와 순성토가 발생되면 사토장 및 순성토장의 위치를 발주처와 협의하여 결정하고, 도면상에 명시한 후 허가 가능여부를 판단

- 절토 및 성토의 구배는 절성토 높이, 토질, 지하수 상태, 시설물의 특성 등을 감안하여 시공이 적절하도록 설계

- 토공 및 암반 굴착시 비산먼지 및 소음․진동에 대한 공법을 제시하고 설계에 반영

- 선정공법에 따라 차수의 필요여부를 검토하여 이를 제시

□ 구조물 설계

- 물과 접하는 부분의 콘크리트 구조물은 콘크리트 시방서에 준한 수밀성이 확보되어야 하며, 필요한 방수대책을 강구

- 구조물 설계시 지하수에 의한 양압력을 고려하여 구조물의 충분한 안정을 검토하고, 부력에 대한 대책 강구

- 침수를 고려한 구조물 설계

□ 기초설계

- 구조물이 설치될 위치는 토질조사를 실시하여 얻어진 자료에 의거 기술적으로 경제적이고 시공성이 감안된 기초형식 결정

□ 수리, 용량 계산

- 수리계산은 각 시설물 공정 간의 손실수두 등의 제반관계를 고려

- 용량은 처리수량을 고려하여 계산

□ 일반배치도 및 토공계획도

□ 구조물 일반도 및 상세도, 배근도

□ 기타 공사

□ 모니터링을 고려한 설계

- 유입수와 유출수의 모니터링이 용이하도록 설계

□ 배치도

□ 기타 설계도

□ 수량산출 및 내역서 작성

□ 공사비는 공종별로 구분하되 최근의 가격정보, 물가자료, 물가정보지 중 최저가를 기준으로 산정하며 가격이 없는 경우에는 견적 또는 신뢰성 있는 자료를 인용

□ 시설별 수량산출 및 내역서 작성

□ 시방서 작성

□ 시공자가 시공에 차질이 없도록 상세하게 시방서 작성

□ 단위 시설별 시방서 및 예정 공정표 작성

□ 기타

□ 특허공법 및 기술을 활용할 때는 도입근거를 명확히 하고 도입

□ 관급자재 선정시 공단의 규정에 의해 위원회를 통하여 선정하도록 관련조치를 이행

Ⅳ			과업수행 일반사항

1. 과업수행 계획서 제출

□ 계약자(과업수행자, 이하 “을”)는 계약 체결 후 관련 규정에 따라 과업을 착수해야 하며 착수계, 과업수행계획표, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

□ “을”은 계약일로부터 7일 이내에 다음사항에 포함된 과업수행계획서를 제출하여야 한다.

□ 과업 수행방향 및 방법, 세부수행 계획표(예정공정표 포함)

□ 분야별 참여연구인력 및 조직편성표(책임자 이력서 포함)

□기타 과업수행에 필요하여 중요하다고 판단되는 사항

2. 과업의 변경 및 조정

□ 본 과업수행 상 용어해석 등에 대한 이견이 있는 경우는 상호 협의 하에 정하되, 이견조정이 이루어지지 않는 경우는 “갑”의 해석에 따른다.

□ 계약서에 명기하지 아니한 사항이라도 “갑”의 감독관이 필요하다고 인정하는 경미한 부분에 대하여는 감독관의 지시에 따라 지체 없이 이를 수행하여야 한다.

□ “을”이 제출한 과업추진공정이나 과업수행 내용은 “갑”의 필요에 따라 “을”과 협의하여 조절할 수 있다.

□ “갑”의 정책변경 등 불가피한 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부에 대한 과업지시를 변경할 수 있다.

3. 실적보고 및 진도관리

□ 과업진행 사항보고

□ 과업의 적정수행을 위하여 과업내용의 추진 및 진행사항을 단계별로 감독관에게 보고하여야 한다.

형 태	보 고 내 용	비 고
착수보고	∙용역수행방향 및 결과산출방안 보고	계약일로부터 7일 이내
최종보고	∙용역 최종산출물 결과보고	계약만료 10일 전
자문회의	∙시범시설 선정	계약만료 40일 전
주간보고	∙주간 과업추진 상항 및 계획 보고	매주 수요일
수시보고	∙긴급을 요하는 작업이 발생할 경우, 발주자가 지정하는 내용 보고	수 시

□ 보고회 등 개최 공문 및 자료는 1주일 전에 감독관에게 제출하여야 한다.

□ 보고회에 필요한 제반경비는 “을”이 부담한다.

□ 보고회 등 개최 시  회의의견을 받은 후 이를 최대한 반영하여 최적의 성과품이 도출되도록 하여야 한다.

4. 품질관리 및 보안

□ “을”은 최신자료를 이용하여야 한다.

□ “을”은 각종 과업을 신중히 검토하여야 하며, 그 정당성, 정확도 및 안정성 등에 섬세하고 세밀한 평가를 하여야 한다.

□ 자료의 분석과 검토가 완료된 후 보고서 등을 작성하되 어떠한 자료가 누락 또는 오기 되었을 경우 필요한 추가 작업을 “을”이 부담･시행한다.

□ 본 과업 수행목적으로 사용한 모든 보고서, 공식자료 및 통계는 그 근거를 제시하여야 한다.

□ “을”은 과업진행 중 또는 완료 후 본 과업에 관한 일체의 사항을 외부로 유출되지 않도록 보안을 유지하여야 하며, 고의 또는 과실로 “갑”에게 손해를 입힌 경우에는 그 책임을 진다.

5. 계약상대자의 책임

□ 계약상대자의 책임범위

□ "을"은 "갑"의 승인을 받아 작성한 서류라 할지라도, 그 내용이 미비하거나 과오나 오류 등으로 인하여 과업 수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 "을"의 책임이 면제되는 것은 아니며, "을"은 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 "갑"의 수정 및 보완요구가 있을 때에는 "을"의 부담으로 즉시 시정․조치하여야 한다.

□ 문서의 기록비치

□ "을"은 이 과업을 수행함에 있어서 발생하는 관계기관과의 협의사항, 공단의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, "갑"의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

□ 안전관리의 의무

○ "을"은 관계법규에 의한 안전수칙 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, "을"의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야한다.

6. 법률준수의 의무

□ "을"은 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

7. 보안 및 비밀유지

□ 모든 보안사항은 감독관과 협의하여 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임을 "을"이 진다.

□ 용역과업자료의 분실, 도난, 누설을 방지하고 자료의 철저한 보안을 위하여 “을”의 과업참여자들은 모두 보안각서를 제출하여야 한다.

□ “갑”에게서 제공받은 모든 자료는 과업수행을 위한 목적 이외에는 사용할 수 없으며, 과업수행 완료와 동시에 반납 또는 폐기하여야 한다.

□ 본 과업 업무 중 생산된 자료는 “갑”의 승인 없이 타 목적에 사용할 수 없다.

8. 용역수행자 교체

□ 이 과업에 참여하는 참여인력은 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 감독관이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우 그 교체를 요구할 수 있으며 "을"은 이에 따라야 한다.

□ “을”의 참여인력이 본 용역과 관련된 당해 업무를 수행함에 있어 품행이 나쁘거나 태만 또는 수행능력이 부족하다고 ‘갑’이 판정하여 그의 배제를 요구할 때에는 ‘을’은 지체 없이 당해 직원의 배제나 교체조치를 취하여야 하며 이로 인하여 계약의무 수행이 지연되도록 하여서는 아니 된다.

□ 이 과업에 참여하는 참여인력이 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 사전에 감독관의 승인을 얻어 그와 동등하거나 그 이상의 자격을 갖춘 인력으로 즉시 교체하여야 한다.

9. 하자보증 및 책임관계

□ “을”은 사업종료 후 사업비 중 직접경비 사용내역서를 제출하여야 하며, 감독관은 직접경비에 대하여 검토 후 정산한다.

□ “을”은 최종성과품 상의 하자로 인하여 “갑”에 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하며 손해배상을 하여야 한다.

□ “을”은 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며, “을”은 보험 또는 공제에 가입하고 보험증서 또는 공제증서를 “갑”에게 제출하여야 한다.

10. 기타

□ "을"의 귀책사유로 인하여 용역의 계속 수행이 불가능하거나, 필요한 경우 “갑”은 용역 중지를 명할 수 있다.

□ 본 과업은 과업내용서에 의하여 성실히 수행하고, 과업내용서에 규정되지 않은 사항에 대하여는 관계법령, 규정지침 및 제반기준에 따라 감독관과 협의하여 시행하여야 한다.

□ 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 사항은 감독관과 협의하여 결정하고, 기타 경미한 사항에 대하여는 감독관의 지시에 응하여야 하며, 이때 소요되는 경비는 “을”의 부담으로 실시하여야 한다.

□ 본 용역을 수행함에 있어 과업내용서의 해석과 과업의 범위 및 실시요령에 대하여 “갑”과 의견을 달리할 경우에는 “갑”의 해석 및 지시에 따른다.

□ 국내외 특허등록 기술 또는 신기술 등을 설계에 도입시 특허에 관련된 분쟁이 없도록 조치하여야 하며, 분쟁 발생시 계약상대자의 책임 하에 해결하여야 한다.

□ 용역수행으로 인하여 발생한 각종 조사자료와 분석결과 등 일체의 성과품은 “갑”의 소유로 하고, “갑”의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 본 과업목적 이외로 사용할 수 없으며, 용역 완료시 “갑”에게 제출하여야 한다.

□ 과업수행 중 상위계획(국가정책 변경 또는 법률 개정 등) 또는 “갑”의 업무 사정에 따라 과업내용이 변경될 수 있으며, 이로 인한 과업범위, 과업기간 및 용역금액의 변경 등은 계약당사자간 협의에 의하여 결정한다.

□ 용역수행에 있어 특별한 사유 없이 다음과 같은 상황이 발생할 경우에는 계약위반으로 간주하여 관계규정에 의하여 조치 할 수 있다.

□ "갑"의 제반 지시사항을 기한 내 이행치 않을 때

□ 계약기간 내 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

□ 용역기관의 부주의로 인한 과실이 인정될 때

Ⅴ			성과품 제출 및 예정공정표

□ 성과품 제출

□ 성과품에는 각종 보고 및 회의 결과가 반영되어야 하고, 성과품 제출기한 10일전에 초안을 작성하여 감독관의 승인을 받아 인쇄하여 제출하여야 한다.

구 분	수량	제출 기한	비고
기본 및 실시설계 보고서(부록 포함)	30부	준공 15일 전까지	전산기록물 (CD 등) 4식 포함
설계예산서	10부	준공 15일 전까지
수량산출서	10부	준공 15일 전까지
단가산출서	10부	준공 15일 전까지
공사시방서	10부	준공 15일 전까지
구조계산서	10부	준공 15일 전까지
설계도면(백도, A3)	10부	준공 15일 전까지
토질조사 성과품	1식	준공 5일 전까지
측량 성과품	1식	준공 5일 전까지

□ 성과품은 공단의 요구에 따라 제출하고 수량 부족 시에는 협의하여 추가할 수 있다.

□ 계약상대자는 용역완료 후에라도 본 용역결과와 관련된 자료요구가 있을 경우 관련 자료를 성실히 제출하여야 한다.

□ 예정공정표

구 분	5월				6월				7월
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
○ 기초조사
○ 현장조사
○ 기본설계
○ 실시설계
○ 착수보고/최종보고
○ 자문회의
○ 성과품제출
- 설계도서(시범시설별)
- 토지조사, 측량 성과품